국가문헌보존관 건립사업

｢기술자문위원회｣ 구성․운영 계획(안)

<붙임1>

국가문헌보존관 건립사업 설계용역 및 공사의 중요 사항에 대해 분야별 전문가의 의견을 수렴하여 효과적으로 건립을 추진하기 위하여 다음과 같이 ｢기술자문위원회｣를 구성․운영하고자 함

□ 기술자문위원회 구성 개요

o (법적 근거) 건설기술 진흥법 제6조 및 같은 법 시행령 제19조

▪건설기술 진흥법 제6조(기술자문위원회) ①건설공사의 설계 및 시공 등의 적정성에 관한 발주청의 자문(諮問)에 응하게 하기 위하여 발주청에 기술자문위원회를 둘 수 있다.

▪동법 시행령 제19조(기술자문위원회의 구성 및 기능 등) ②기술자문위원회를 구성·운영하는 경우에는 계획·조사·설계 용역의 수행단계에서 1회 이상 기술자문위원회에 자문을 받아야 한다.

o (자문위원 구성)

- 보존·복원, 보존관 운영, 건축계획, 건축구조/시공, 인테리어, 기계/소방, 조경, 전기, 통신, 전시 등 관계 전문가 10명 내외로 구성

《 자문위원의 자격 》건설기술 진흥법 시행령 제19조 제1항

▪중앙 및 지방건설기술심의위원회 및 다른 기관 기술자문위원회 위원

▪관계 시민단체가 추천하는 사람

▪해당 분야의 전문가

o (자문 내용)

- 계획·조사·설계 및 공법 변경, 공사기간 산정 등 건립공사의 설계 및 시공 등의 적정성에 관한 사항

o (자문 기간)

- 설계부터 공사 준공 시 까지(민간위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임 가능)

□ 운영 계획(안)

o 회의 운영

- 필요시 수시 회의 개최

- 전체회의를 원칙으로 하되, 사안에 따라 필요시 소위원회 개최

o 주요 내용

- 새로운 기술ㆍ공법, 대체될 수 있는 설계, 대안입찰ㆍ일괄입찰의 설계심의, 대안입찰가격의 조정 또는 설계의 수정, 실시설계 기술제안입찰의 기술제안서의 적격 여부 및 점수평가에 관한 사항

- 건설공사의 공사기간 산정의 적정성에 관한 사항

- 건설공사의 공법 변경 등 중대한 설계 변경의 적정성에 관한 사항

- 정밀안전진단의 적정성에 관한 사항

- 기술자문위원회가 속한 발주청이 시행하는 건설기술용역사업의 용역사업자 선정을 위한 사업수행능력 세부평가기준과 기술평가의 방법ㆍ기준 및 입찰공고안의 적정성에 관한 사항

- 그 밖에 건설공사의 설계 및 시공 등의 적정성에 관하여 발주청이 자문하는 사항

o 참석비 등 지급

- 회의 참석 및 사전 설계검토 시 관련 규정에 따른 사례비 지급

□ 향후 일정

o 자문위원 위촉 및 설계 관련 자문회의 개최(‘21.2월)

o 이후 필요시 전체 또는 소위원회 개최(수시)

붙임  국가문헌보존관 건립 추진현황

붙임		국가문헌보존관 건립 추진현황

□ 추진 배경

ㅇ ’20.12월 국립중앙도서관 보존서고 포화율이 88%(1,500만권중 1,322만권)로, 2023년 서고 포화 예상(연간 장서 47만 권 증가)

ㅇ 정보매체 다변화(전자책, 동영상 등)에 따른 첨단 보존·복원관리 및 디지털콘텐츠 자원 생성․가공․데이터 보존센터 구축 필요

□ 사업 개요

ㅇ (사업기간/입지) 2021년 ~ 2023년 (2024년 개관)/평창군 대관령면

ㅇ (건립규모) 145,297㎡(부지), 37,246㎡(연면적)

ㅇ (보존규모) 13,990㎡(서고 면적), 약 1,400만권(목표 수장량)  * 30년간 보존 수장량

ㅇ (총사업비) 610억원(‘20.11월 타당성 통과 AHP 0.639)/ 2021년 예산 28억

ㅇ (추진 방법) 2018평창동계올림픽 시설인 국제방송센터를 활용, 11개 구획을 수장량 증가에 맞춰 서고로 2단계* 리모델링을 통해 보존 공간 확보

* 1단계 11개 구획 중  7개 구획, 2단계(2053년 계획) 4개 구획

□ 주요 기능

기 능	내 용
국가문헌 영구보존 관리	ㅇ 국가문헌 영구보존 및 첨단 서고시스템 관리·운영
과학적 보존ㆍ복원 처리	ㅇ 국가문헌 과학적 보존 및 첨단 보존·복원 연구
디지털콘텐츠 구축	ㅇ 디지털콘텐츠 가공 및 데이터 센터 구축 운영
복합문화서비스	ㅇ 희귀본 등 소장자료의 온·오프라인 전시 등

□ 추진 일정

ㅇ ‘21. 1. ~ ‘21. 6.  건립 기본계획 고시, 기술자문위원 구성 및 운영

ㅇ ‘21. 6. ~ ‘22. 3.  설계공모, 기본 및 실시설계

ㅇ ‘22. 7. ~ ‘23.12.  건축 공사 및 준공, 추진단 구성 및 운영

ㅇ ‘24. 4.           시범운영 및 개관